Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.06.2018

Bod pořadu jednání:	59.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2517/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro dobrovolný svazek Cyklostezka Svaté Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou na projekt „Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1165/18/mRK	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Mimořádná rada Libereckého kraje dne 11. 6. 2018
     
Výbor dopravy dne 19. 6. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost dobrovolného svazku Cyklostezka Svaté Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 72559616, ze dne 1. 6. 2018 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel“ ze dne 30. 6. 2018 na 20. 12. 2018 a o změně termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2018 na 8. 2. 2019, z důvodu problematického výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2517/2017, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel“ z 30. 6. 2018 na 20. 12. 2018 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2018 na 8. 2. 2019
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení.	
Termín: 20. 07. 2018
2.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázekpodepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2517/2017.	
Termín: 10. 08. 2018

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je k projednání předkládán Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2517/2017
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu na projekt „Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel“, uzavíraný mezi Libereckým krajem a příjemcem dobrovolným svazkem Cyklostezka Svaté Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 72559616.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze dne 30. 6. 2018 na 20. 12. 2018 u výše uvedeného projektu, která byla odboru dopravy doručena dne 1. 6. 2018.

Příjemce dotace v žádosti o změnu projektu uvádí, že změnu termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování požaduje především z důvodu problematického výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Dobrovolný svazek vypsalo 2x výběrové řízení, v kterém oslovilo celkem 7 projektových kanceláří, ale ani jedna se do výběrového řízení  nepřihlásila. Při třetí výzvě se podařilo zpracovatele vybrat a uzavřít smlouvu. Na základě výše uvedeného problematického výběrového řízení už není reálné vše úspěšně zrealizovat do 30. 6. 2018.

V podmínkách Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 – podpora projektové přípravy schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 93/17/ZK byl stanoven termín realizace aktivit od 1. 1. 2017 – 30. 12. 2018. Smlouva s příjemcem byla podepsána 7. 8. 2017 a realizaci příjemce dle žádosti o dotaci zahájil 1. 7. 2017.

Resort dopravy konstatuje, že prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 6. 2018 na 20. 12. 2018 a termínu závěrečného vyúčtování z 19. 8. 2018 na 8. 2. 2019 u výše uvedeného projektu je v souladu s podmínkami příslušného Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 – podpora projektové přípravy. Požadovaná změna nemá dodatečný dopad na provedené bodové hodnocení projektů, neovlivní účel, na který byla dotace poskytnuta, ani závazné parametry projektu. 

Z výše uvedených důvodů je pravděpodobné, že pokud dostane příjemce možnost pokračovat v projektové přípravě prodloužením termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování projektu, bude úsek cyklostezky v budoucnu dokončen. 
Dostavbou úseku dojde jednoznačně ke zvýšení podílu cyklodopravy, jakožto udržitelné formy dopravy, při každodenní dojížďce za prací a zároveň dojde ke zvýšení turistického potenciálu.

Z výše uvedených důvodů, na základě žádosti příjemce dotace předkládá odbor dopravy, jako administrátor dotace,  dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2517/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, v kterém je prodloužen termín realizace projektu a termín závěrečného vyúčtování projektu, ke schválení orgánům kraje. 

Přílohy
P01 Žádost o změnu projektu
P02 Smlouva OLP/2517/2017 
P03 Dodatek č. 1 Smlouvy OLP/2517/2017