Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.09.2018

Bod pořadu jednání:	27.	
		
Název :	Změna termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Chotyně – OLP/4466/2018	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1711/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 4. 9. 2018
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 20.9.2018

Předkládá:	Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Chotyně, se sídlem č.p. 163, 463 34 Chotyně, IČO 00672033, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve středu obce Chotyně“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve středu obce Chotyně“ z 30. 11. 2018 na 30. 9. 2019, a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2019 na 19. 11. 2019,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4466/2018, o poskytnutí účelové dotace  z Dotačního  fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Chotyně se sídlem č.p. 163, 463 34 Chotyně, IČO 00672033, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování, projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve středu obce Chotyně“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, k podpisu
Termín: 31. 10. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je prodloužení termínu ukončení realizace akce a prodloužení termínu pro doložení závěrečného vyúčtování příjemci obec Chotyně.
Obec Chotyně podala v roce 2018 žádost o poskytnutí dotace do vyhlášeného Programu obnovy venkova v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje. Termín realizace aktivit daný vyhlášeným programem pro rok 2018 byl stanoven v termínu od 1. ledna 2018 do 30. září 2019. 
Poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve středu obce Chotyně“ bylo schváleno zastupitelstvem usnesením č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 rozhodnutím o poskytnutí dotace z programu 2.1 Program obnovy venkova.

Mezi Libereckým krajem a obcí Chotyně byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/4466/2018 (příloha č. 2). V článku III. bod 4. byl stanoven termín pro ukončení realizace výše uvedeného projektu nejpozději do 30. 11. 2018. 

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů obdržel dne 16. 8. 2018 žádost starostky obce Chotyně o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve středu obce Chotyně“ do 30. 9. 2019 (příloha č.1). 
Současně s výše uvedeným projektem musí být v jedné části obce provedena rekonstrukce vodovodního řadu, která bude realizovaná až v příštím roce. Z tohoto důvodu žádá obec o posunutí ukončení projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve středu obce Chotyně“ z původního termínu 30.11.2018 na nový termín 30.9.2019. 

Uvedená změna nemá vliv na bodové hodnocení projektů.

Na základě žádosti obce Chotyně překládáme orgánům kraje dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/4466/2018, ve které je uveden nový termín pro ukončení a vyúčtování projektu. 

P01: Žádost příjemce obec Chotyně
P02 Smlouva OLP/4466/2018
P03 Dodatek č. 1 k OLP/4466/2018