Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.09.2018

Bod pořadu jednání:	28.	
		
Název :	Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Prysk, obec Levínská Olešnice a MR Jizera	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1712/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 4. 9. 2018
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 20.9.2018

Předkládá:	Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a)	žádost obce Prysk o změnu v projektu „Rekonstrukce komunikací v obci Prysk“,	
b)	žádost obce Levínská Olešnice o změnu v projektu „Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici“,	
c)	žádost MIKROREGIONU JIZERA o změnu v projektu „Zvyšování kvality života v MR JIZERA“,	
mění
a)	část usnesení č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 v části termín realizace projektu „Rekonstrukce komunikací v obci Prysk“ příjemce obec Prysk, Dolní Prysk č.p.17, 471 15 Prysk, IČ 00525197, z původního termínu realizace 31. 5. 2018–31. 12. 2018 na nový termín realizace 31. 5. 2018–30. 9. 2019,	
b)	část usnesení č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018  v části termín realizace projektu „Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici“ příjemce obec Levínská Olešnice, č.p.94, 514 01 Levínská Olešnice, IČ 00854662, z původního termínu realizace 7. 5. 2018–28. 9. 2018 na nový termín realizace 7. 5. 2018–30. 6. 2019,	
c)	část usnesení č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018  v části parametry projektu „Zvyšování kvality života v MR JIZERA“ příjemce MIKROREGION JIZERA, č.p.195, 463 46 Příšovice, IČ 70226342 takto	
Název parametru	Měrná jednotka	Schválená hodnota parametru 	Hodnota parametru po změně	
Oprava střechy OÚ	m2	436	436	
Oprava místní komunikace	m2	415	167	
Oprava chodníku	m2	145	189	
Rekonstrukce chodníku	m2	98	94	
Rekonstrukce hřbitovní zdi	m	18,8	18,8	

a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemců dotací obec Prysk, obec Levínská Olešnice a MR JIZERA o změnách v projektech.
Termín: 30. 09. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu jsou žádosti příjemců dotace obce Prysk, Levínská Olešnice a MIKROREGION JIZERA o změnu v projektech. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 29.5.2018 rozhodlo o poskytnutí dotace z programu 2.1 Program obnovy venkova výše uvedeným příjemcům usnesením č. 194/18/ZK. 

Žádost o změnu v projektu příjemce obec Prysk
a) Obci Prysk byla na základě předložené žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova schválena účelová neinvestiční dotace na projekt „Rekonstrukce komunikací v obci Prysk“ s termínem realizace projektu od 31.5.2018 do 31.12.2018. 

Dne 20. 8. 2018 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost starosty obce Prysk (příloha č. 1) o změnu - prodloužení termínu realizace projektu ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Důvodem žádosti jsou problémy se zajištěním firmy , která by realizovala rekonstrukci místní komunikace. Starosta obce Prysk žádá o schválení změny ukončení termínu realizace projektu, a to z 31. 12. 2018 na 30.9.2019. 

Žádost o změnu v projektu příjemce obec Levínská Olešnice
b) Obci Levínská Olešnice byla na základě předložené žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova schválena účelová neinvestiční dotace na projekt „Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici“ s termínem realizace projektu od 7.5.2018 do 28.9.2018. 

Dne 27. 8. 2018 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost starostky obce Levínská Olešnice (příloha č. 2) o změnu - prodloužení termínu realizace projektu ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Důvodem žádosti je, že výrobce schválené střešní krytiny z nedostatku výrobní kapacity a výpadku daného zboží na trhu nemůže dodržet dohodnutý termín dodání objednaného zboží. Náhradní termín dodání krytiny – plastových šablon v podzimních měsících nezaručuje příznivé klimatické podmínky pro opravu střechy. 
Z výše uvedených důvodů žádá starostka obce Levínská Olešnice o prodloužení termínu realizace projektu, a to z 28.9.2018 na 30.6.2019.

Žádost o změnu v projektu příjemce MIKROREGION JIZERA
c) MIKROREGIONU JIZERA byla na základě předložené žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova schválena účelová investiční a neinvestiční dotace na projekt „Zvyšování kvality života v MR JIZERA“ s pěti parametry projektu - oprava střech OÚ - m2 - 436;
oprava místní komunikace - m2 - 415; oprava chodníku - m2 - 145; rekonstrukce chodníku - m2 - 98; rekonstrukce hřbitovní zdi - m – 18,8. 

Dne 24.8.2018 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost předsedy MIKROREGIONU JIZERA (příloha č. 3) o změnu hodnot u třech parametrů z celkem pěti schválených parametrů projektu ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
Členská obec Svijany měla dle podané žádosti realizovat pouze opravu MK na ploše 415 m2 (2.parametr).  Z důvodu velice špatného stavu místní komunikace na p.p.č. 106/16 v k.ú. Svijany realizovaly Svijany opravu krytu MK z vlastních zdrojů již na jaře 2018. V rámci dotace schválené MIKROREGIONU JIZERA provedou Svijany opravu krytu MK včetně likvidace dešťových vod v úseku „K zastávku u dálnice“ na p.p.č. 275/1 a 255/4 v k.ú. Svijany v délce 51,021 m (167 m2) a zároveň opravu chodníku v délce 28,00 m (44,15 m2)  na p.p.č. 255/4 v k.ú. Svijany. K ploše „oprava chodníku“ 145 m2 (v obci Kobyly) se parametr navýší o 44,15 m2 chodníku v obci Svijany na celkovou hodnotu 189 m2 (3.parametr).

Další změnou je snížení4. parametru projektu  - rekonstrukce chodníku. V členské obci Pěnčín, po předložení výkazu výměr na základě projektové dokumentace k výběrovému řízení, došlo k upřesnění plošného parametru z 98,00 m2 na 94,64 m2. 

Na základě těchto skutečností žádá předseda mikroregionu o úpravu parametrů, takto: 

Název parametru	Měrná jednotka	Schválená hodnota parametru	Hodnota parametru po změně	
Oprava střechy OÚ	m2	436	436	
Oprava místní komunikace	m2	415	167	
Oprava chodníku	m2	145	189	
Rekonstrukce chodníku	m2	98	94	
Rekonstrukce hřbitovní zdi	m	18,8	18,8	

Celkové náklady projektu zůstávají po změně hodnot u třech parametrů z celkem pěti schválených parametrů stejné.

Uvedené změny nemají vliv na bodové hodnocení projektů.

Vzhledem k tomu, že všechny údaje o projektech byly schváleny orgány kraje, předkládáme ke schválení výše uvedené změny v uvedených projektech, které budou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace, jejíž vzor byl schválen zastupitelstvem usnesením číslo 194/18/ZK dne 29.5.2018.

P01: Žádost příjemce obec Prysk
P02: Žádost příjemce obec Levínská Olešnice
P03: Žádost příjemce MR JIZERA