Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.09.2018

Bod pořadu jednání:	35.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3934/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, pro Město Rokytnice nad Jizerou na projekt „Přestavba lávky přes Jizeru, napojení na Greenway Jizera“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1696/18/RK ze dne 4. 9. 2018	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 4. 9. 2018
     
Výbor dopravy dne 18. 9. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ 00276057, ze dne 20. 8. 2018 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Přestavba lávky přes Jizeru, napojení na Greenway Jizera“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Přestavba lávky přes Jizeru, napojení na Greenway Jizera“ ze dne 31. 12. 2019 na 30. 6. 2021 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 2. 2020 na 19. 8. 2021, z důvodu vzniklé nepředpokládané situaci, oprav dvou lávek přes Jizeru, což by znemožnilo přístup do místní části Blansko,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3934/2018, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Přestavba lávky přes Jizeru, napojení na Greenway Jizera“ z 31. 12. 2019 na 30. 6. 2021 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 2. 2020 na 19. 8. 2021
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,	
Termín: 30. 09. 2018
2.	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3934/2018.	
Termín: 30. 10. 2018

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je k projednání předkládán Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/3934/2018
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu na projekt „Přestavba lávky přes Jizeru, napojení na Greenway Jizera“, uzavíraný mezi Libereckým krajem a příjemcem Městem Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ 00276057.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze dne 31. 12. 2019 na 30. 6. 2021 u výše uvedeného projektu, která byla odboru dopravy doručena dne 20. 8. 2018.

Příjemce dotace v žádosti o změnu projektu uvádí, že změnu termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování požaduje především z důvodu vzniklé nepředpokládané situaci, která by nastala při souběhu dvou realizací projektů najednou. Město Jablonec nad Jizerou Městu Rokytnice nad Jizerou oznámilo plánování započetí opravy mostu přes řeku Jizeru, který umožňuje dopravní dostupnost do místní části Blansko. Druhým možným přístupovým místem do části Blansko je předmětná lávka přes řeku Jizeru. V případě realizace obou projektů, oprav obou lávek, zároveň, by se místní část Blansko stala nedostupná. Na základě výše uvedené nepředpokládané situaci není reálné přestavbu lávky uskutečnit do 31. 12. 2019.

V podmínkách Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.1 – rozvoj cyklistické dopravy schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 32/18/ZK byl stanoven termín realizace aktivit od 1. 1. 2018 – 30. 6. 2021. Smlouva s příjemcem byla podepsána 20. 6. 2018 a realizaci příjemce dle žádosti o dotaci zahájí 1. 4. 2019.

Resort dopravy konstatuje, že prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 31. 12. 2019 na 30. 6. 2021 a termínu závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2020 na 19. 8. 2021 u výše uvedeného projektu je v souladu s podmínkami příslušného Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.1 – rozvoj cyklistické dopravy. Požadovaná změna nemá dodatečný dopad na provedené bodové hodnocení projektů, neovlivní účel, na který byla dotace poskytnuta, ani závazné parametry projektu. 

Z výše uvedených důvodů je pravděpodobné, že pokud dostane příjemce možnost pokračovat v projektové přípravě prodloužením termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování projektu, bude přestavba realizována. 
Přestavbou lávky dojde jednoznačně ke zvýšení podílu cyklodopravy, jakožto udržitelné formy dopravy, při každodenní dojížďce za prací a zároveň dojde ke zvýšení turistického potenciálu.

Na základě žádosti příjemce dotace předkládá odbor dopravy, jako administrátor dotace,  dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3934/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, v kterém je prodloužen termín realizace projektu a termín závěrečného vyúčtování projektu, ke schválení orgánům kraje. 

Přílohy:
P01 Žádost o změnu projektu
P02 Smlouva OLP/3934/2018 
P03 Dodatek č. 1 Smlouvy OLP/3934/2018