Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.10.2018

Bod pořadu jednání:	27.	
		
Název :	Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Stvolínky, Bílý Potok a Svazek obcí Novoborska	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1925/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 9.10. 2018
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 25.10.2018

Předkládá:	Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a)	žádost obce Stvolínky o změnu v projektu „Rekonstrukce střechy obecního úřadu Stvolínky“,	
b)	žádost obce Bílý Potok o změnu v projektu „Historizující fasáda budovy Obecního úřadu v Bílém Potoce“,	
c)	žádost Svazku obcí Novoborska o změnu v projektu „Vybudování a obnova veřejného osvětlení v Novoborsku“,	
mění
a)	část usnesení č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 v části termín realizace projektu „Rekonstrukce střechy obecního úřadu Stvolínky“ příjemce obec Stvolínky, č.p.53, 471 02 Stvolínky, IČ 00524751, z původního termínu realizace 1. 6. 2018–30. 11. 2018 na nový termín realizace 1. 6. 2018–30. 9. 2019,	
b)	část usnesení č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 v části termín realizace projektu „Historizující fasáda budovy Obecního úřadu v Bílém Potoce“ příjemce obec Bílý Potok, č.p.337, 463 62 Hejnice, IČ 00831417, z původního termínu realizace 1. 8. 2018–30. 9. 2018  na nový termín realizace 1. 4. 2018–30. 9. 2018,	
c)	část usnesení č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 v části termín realizace projektu „Vybudování a obnova veřejného osvětlení v Novoborsku“ příjemce Svazek obcí Novoborska, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČ 68955057, z původního termínu realizace 1. 1. 2018–30. 12. 2018 na nový termín realizace 1. 1. 2018–30. 9. 2019	
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemců dotací obec Stvolínky, obec Bílý Potok a Svazek obcí Novoborska o změnách v projektech.
Termín: 30. 11. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu jsou žádosti příjemců dotace obce Stvolínky, Bílý Potok a Svazek obcí Novoborska o změnu v projektech. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 29.5.2018 rozhodlo o poskytnutí dotace z programu 2.1 Program obnovy venkova výše uvedeným příjemcům usnesením č. 194/18/ZK. 

Žádost o změnu v projektu příjemce obec Stvolínky
a) Obci Stvolínky byla na základě předložené žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova schválena účelová neinvestiční dotace na projekt „Rekonstrukce střechy obecního úřadu Stvolínky“ s termínem realizace projektu od 1.6. 2018 do 30.11.2018. 

Dne 14. 9. 2018 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost starostky obce Stvolínky (příloha č. 1) o změnu - prodloužení termínu realizace projektu ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. V červnu 2018 oslovila obec Stvolínky tři firmy s výzvou k podání nabídek. Nabídku podala pouze jedna firma, která nepředložila kompletní podklady a veřejná zakázka byla zrušena. Do současné doby obec nenašla vhodnou firmu, která by realizovala rekonstrukci střechy obecního úřadu. Z tohoto důvodu žádá starostka obce Stvolínky o schválení změny ukončení termínu realizace projektu, a to z 30. 11. 2018 na 30.9.2019. 

Žádost o změnu v projektu příjemce obec Bílý Potok
b) Obci Bílý Potok byla na základě předložené žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova schválena účelová investiční dotace na projekt „Historizující fasáda budovy Obecního úřadu v Bílém Potoce“ s termínem realizace projektu od 1.8. 2018 do 30.9.2018. 

Dne 17. 9. 2018 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost starosty obce Bílý Potok (příloha č. 2) o změnu - opravu termínu realizace projektu ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. V žádosti byl chybně uveden termín zahájení akce 1.8.2018, správný termín zahájení realizace měl být 1.4.2018. Starosta obce Bílý Potok žádá o opravu termínu. Celý projekt byl zahájen předáním staveniště 1.4.2018. 

Žádost o změnu v projektu příjemce Svazek obcí Novoborska
c) Svazku obcí Novoborska byla na základě předložené žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova schválena účelová investiční dotace na projekt „Vybudování a obnova veřejného osvětlení v Novoborsku“ s termínem realizace projektu od 1.1. 2018 do 30.12.2018. 

Dne 12.9.2018 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost předsedy Svazku obcí Novoborska (příloha č. 3) o změnu - prodloužení termínu realizace projektu ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Důvodem jsou komplikace při výběru dodavatelů a složitá koordinace realizace projektu mezi deseti členskými obcemi. Z tohoto důvodu žádá předseda Svazku obcí Novoborska o schválení změny ukončení termínu realizace projektu, a to z 30. 12. 2018 na 30.9.2019. 

Uvedené změny nemají vliv na bodové hodnocení projektů.

Vzhledem k tomu, že všechny údaje o projektech byly schváleny orgány kraje, předkládáme ke schválení výše uvedené změny v uvedených projektech, které budou uvedeny ve smlouvách o poskytnutí účelové dotace, jejichž vzor byl schválen zastupitelstvem usnesením číslo 194/18/ZK dne 29.5.2018.

P01: Žádost příjemce obec Stvolínky
P02: Žádost příjemce obec Bílý Potok
P03: Žádost příjemce SO Novoborska