Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.10.2018

Bod pořadu jednání:	28.	
		
Název :	Změna termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Dětřichov – OLP/4806/2018	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1926/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne  9.10. 2018
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 25.10.2018

Předkládá:	Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Dětřichov, se sídlem č.p. 2, 464 01 Dětřichov, IČO 00831468, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava MK SO 101 Úsek č. I – 9c v obci Dětřichov“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava MK SO 101 Úsek č. I – 9c v obci Dětřichov“ z 31. 12. 2018 na 30. 9. 2019, a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2019 na 19. 11. 2019,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4806/2018, o poskytnutí účelové dotace  z Dotačního  fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Dětřichov, se sídlem č.p. 2, 464 01 Dětřichov, IČO 00831468, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování, projektu „Oprava MK SO 101 Úsek č. I – 9c v obci Dětřichov“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, k podpisu.
Termín: 30. 11. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je prodloužení termínu ukončení realizace projektu a prodloužení termínu pro doložení závěrečného vyúčtování příjemci obec Dětřichov.
Obec Dětřichov podala v roce 2018 žádost o poskytnutí dotace do vyhlášeného Programu obnovy venkova v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje. Termín realizace aktivit daný vyhlášeným programem pro rok 2018 byl stanoven v termínu od 1. ledna 2018 do 30. září 2019. 
Poskytnutí dotace na projekt „Oprava MK SO 101 Úsek č. I – 9c v obci Dětřichov“ bylo schváleno zastupitelstvem usnesením č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 rozhodnutím o poskytnutí dotace z programu 2.1 Program obnovy venkova.

Mezi Libereckým krajem a obcí Dětřichov byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/4806/2018 (příloha č. 2). V článku III. bod 4. byl stanoven termín pro ukončení realizace výše uvedeného projektu nejpozději do 31. 12. 2018. 

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů obdržel dne 20. 9. 2018 žádost starosty obce Dětřichov o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava MK SO 101 Úsek č. I – 9c v obci Dětřichov“ do 30. 9. 2019 (příloha č.1). 
Stávající zastupitelstvo na konci svého volebního období nechtělo převzít finanční závazek plynoucí ze smlouvy se zhotovitelem, který byl vybrán ve výběrovém řízení pro realizaci stavby a zavázat tím na konci svého volebního období, těsně před komunálními volbami nové zastupitelstvo. Smlouva s vybraným zhotovitelem bude předložena po komunálních volbách nově zvolenému zastupitelstvu ke schválení.
Z uvedeného časového posunu projednání v obecním zastupitelstvu a s ohledem na předpokládané klimatické podmínky před koncem roku, které mohou mít vliv na dodržení technologických podmínek pro dodržení kvality stavebních prací, není možné dodržet stávající termín ukončení projektu, tj. do 31. 12. 2018.

Z tohoto důvodu žádá obec o posunutí ukončení projektu „Oprava MK SO 101 Úsek č. I – 9c v obci Dětřichov“ z původního termínu 31.12.2018 na nový termín 30.9.2019. 

Uvedená změna nemá vliv na bodové hodnocení projektů.

Na základě žádosti obce Dětřichov překládáme orgánům kraje dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/4806/2018, ve které je uveden nový termín pro ukončení a vyúčtování projektu. 

P01: Žádost příjemce obec Dětřichov
P02 Smlouva OLP/4806/2018
P03 Dodatek č. 1 k OLP/4806/2018