Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.10.2018

Bod pořadu jednání:	29.	
		
Název :	Změna termínu realizace – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2029/2018 na projekt „Gymnázium – oprava čelní fasády“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1943/18/RK ze dne 9. 10. 2018	

Zpracoval:	Mgr. Renata Charvátová
analytik odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
	
Projednal:	Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Petr Tulpa
náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2029/2018 na projekt „Gymnázium – oprava čelní fasády“, uzavřený mezi Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO  70891508 a Městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO 00276227, kterým se prodlužuje termín realizace projektu do 31. 12. 2019 a termín pro předložení závěrečného vyúčtování do 19. 2. 2020
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2029/2018 k podpisu Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 11. 2018

Důvodová zpráva

Změna termínu realizace  - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2029/2018 na projekt „Gymnázium – oprava čelní fasády“  

Předmětem materiálu je schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2029/2018 na projekt „Gymnázium – oprava čelní fasády“.

Zastupitelstvo kraje dne 24. 4. 2018 schválilo usnesením č. 147/18/ZK poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 700.000 Kč na projekt „Gymnázium – oprava čelní fasády“ s termínem realizace projektu od 1. 4. 2018 a ukončením realizace projektu nejpozději do 31. 12. 2018. 

Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána dne 28. 5. 2018. Následně proběhlo výběrové řízení, ze kterého Městem Turnov vybraný dodavatel, po získání výhodnější zakázky odstoupil. Dne 21. 8. 2018 Město Turnov požádalo o prodloužení termínu realizace akce do 31. 12. 2019. Vzhledem k vytíženosti stavebních firem na rok 2018 bude Město Turnov vyhlašovat nové výběrové řízení na rok 2019 ihned po schválení prodloužení termínu realizace akce.   

S ohledem na výše uvedené skutečnosti předkládáme orgánům kraje ke schválení:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 
č. OLP/2029/2018 na projekt „Gymnázium – oprava čelní fasády“, jehož předmětem je změna a prodloužení termínu realizace využití poskytnutých finančních prostředků nově do 31. 12. 2019 a prodloužení termínu vyúčtování projektu nově do 19. 2. 2020.  
Příjemce dotace, charakter a výše finančních prostředků zůstávají beze změny.

Příloha: 
Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2029/2018 
Příloha č. 2 – Žádost města Turnov