Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.10.2018

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Dodatky č. 1 ke smlouvám OLP/3824/2018 a OLP/3826/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje a Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3937/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, pro Obec Rádlo	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1975/18/mRK ze dne 16. 10. 2018	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Mimořádná Rada Libereckého kraje dne 16. 10. 2018
     
Výbor dopravy dne 23. 10. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti Obce Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČ 00262544
1.	o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu Odra – Nisa/Nová Hřebenovka podél I/65“ – smlouva OLP/3824/2018 ze dne 20. 9. 2018,	
2.	o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Investice do kritických úseků cyklotrasy Odra - Nisa v obci Rádlo“ – smlouva OLP/3937/2018 ze dne 20. 9. 2018,	
3.	o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65“ – smlouva OLP/3826/2018 ze dne 11. 10. 2018,	
rozhoduje
1.	o změně termínu ukončení realizace projektu „Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu Odra – Nisa/Nová Hřebenovka podél I/65“ ze dne 31. 10. 2018 na 30. 11. 2018 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 20. 12. 2018 na 19. 1. 2019, z důvodu kapacitních možností vybrané realizační firmy,	
2.	o změně termínu ukončení realizace projektu „Investice do kritických úseků cyklotrasy Odra – Nisa v obci Rádlo“ ze dne 30. 10. 2018 na 30. 11. 2018 a o změně termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 1. 2019 na 10. 3. 2019, z důvodu kapacitních možností vybrané realizační firmy,	
3.	o změně termínu ukončení realizace projektu „Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65“ ze dne 31. 10. 2018 na 31. 12. 2019 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 20. 12. 2018 na 19. 2. 2020, z důvodu kapacitních možností vybrané realizační firmy,	
schvaluje
1.	Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3824/2018, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu Odra – Nisa/Nová Hřebenovka podél I/65“ z 31. 10. 2018 na 30. 11. 2018 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 20. 12. 2018 na 19. 1. 2019,	
2.	Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3937/2018, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Investice do kritických úseků cyklotrasy Odra – Nisa v obci Rádlo“ z 30. 10. 2018 na 30. 11. 2018 a termín závěrečného vyúčtování ze dne 19. 1. 2019 na 10. 3. 2019,	
3.	Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3826/2018, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65“ z 31. 10. 2018 na 31. 12. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 20. 12. 2018 na 19. 2. 2020	
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,	
Termín: 30. 10. 2018
2.	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3824/2018, Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3826/2018 a Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3937/2018.	
Termín: 30. 10. 2018

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je předložena revokace usnesení č.1843/18/RK ze dne 9. 10. 2018.

Byly k projednání předloženy tři Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací:
Smlouva OLP/3824/2018 - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6176283 
Smlouva OLP/3826/2018 - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6176727
Smlouva OLP/3937/2018 - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6178467

Důvodem pro uzavření dodatků byly žádosti příjemce dotace Obce Rádlo o prodloužení termínu ukončení realizace projektů o 1 měsíc u výše uvedených projektů, které byly odboru dopravy doručeny dne 21. 9. 2018.
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3824/2018 na projekt „Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu Odra – Nisa/Nová Hřebenovka podél I/65“, uzavíraný mezi Libereckým krajem a příjemcem obcí Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČ 00262544,
2.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3826/2018 na projekt „Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65“, uzavíraný mezi Libereckým krajem a příjemcem obcí Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČ 00262544,
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/3937/2018 na projekt „Investice do kritických úseků cyklotrasy Odra - Nisa v obci Rádlo“, uzavíraný mezi Libereckým krajem a příjemcem obcí Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČ 00262544.
Příjemce dotací v žádostech o změnu projektů uvádí, že změnu termínu ukončení realizace projektů a termínů závěrečného vyúčtování požaduje především z důvodu nedostatečných kapacitních možností vybraného dodavatele v rámci stavebních činností na jednotlivých projektech. Z hlediska efektivity financování jednotlivých staveb byl vysoutěžen jeden dodavatel na všechny tři stavby podpořené z dotací.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem příjemce dotace není schopen dodržet termín realizace projektů. Příjemce požadoval posun termínů o jeden měsíc.

Dne 12. 10. 2018 byla příjemcem dotací předložena nová žádost o prodloužení termínu realizace u projektu „Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65“, dle OLP/3826/2018. V žádosti příjemce uvádí nové informace, že z důvodu klimatických podmínek a kapacitních možností vybrané firmy není schopen realizovat projekt do 30. 10. 2018, ani do 30. 11. 2018.

V podmínkách Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.1 – rozvoj cyklistické dopravy schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 32/18/ZK byl stanoven termín realizace aktivit od 1. 1. 2018 – 30. 6. 2021. 

Resort dopravy konstatuje, že prodloužení termínu ukončení realizace projektu u výše uvedených projektů je v souladu s podmínkami vyhlášení a nemá dodatečný dopad na provedené bodové hodnocení projektů, neovlivní účel, na který byly dotace poskytnuty, ani závazné parametry projektů. 

Dostavbou úseků dojde jednoznačně ke zvýšení podílu cyklodopravy, jakožto udržitelné formy dopravy, při každodenní dojížďce za prací a zároveň dojde ke zvýšení turistického potenciálu.

Z výše uvedených důvodů, na základě žádostí příjemce dotací předkládá odbor dopravy, jako administrátor dotace,  dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/3824/2018 a dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3826/2018  a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/3937/2018, v kterých jsou prodlouženy termíny realizace projektu a termíny závěrečného vyúčtování projektu, ke schválení orgánům kraje. 

Přílohy:
038_P01 Žádost o změnu projektu
038_P02 Žádost o změnu projektu
038_P03 Žádost o změnu projektu
038_P04 Dodatek č. 1 Smlouvy OLP/3824/2018
038_P05 Dodatek č. 1 Smlouvy OLP/3826/2018
038_P06 Dodatek č. 1 Smlouvy OLP/3937/2018